<별지 서식>

사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2018-01

담당부서

작성자

기획관리실

(양금식/031-361-9544

/yanks1@kdemo.or.kr)

사 업 명

사업회 업무시설 개선공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경: 사업회의 안정적인 운영과 방문 프로그램 진행의 효율화를 위한 업무시설 필요성 증대에 따라 지방 이전이 완료된 공공기관(에너지경제연구원)의 종전부동산을 관계기관 협의에 의해 확보(무상임대). 관련분야 전문가가 참여하여 수립한 공사기본계획에 의거하여 사업을 추진할 예정

○ 추진기간: ’17년 3월 ~ ’18년 11월

○ 총사업비: 4,858백만원(2차년도)

○ 주요내용

- 사무공간, 건물 외관 개선공사

- 사료보존실 및 사료관련 업무시설 구축

○ 추진경과

- 17. 4. 행자부와 에너지경제연구원간 부동산 매매계약 완료

* ‘17년 지분취득비 87억 지출 완료

- 17. 3~ 6 공사기본계획 수립

- 17. 4.27. 행안부와 에너지경제연구원 간 매매계약 체결

- 17. 6~10 ISP 추진

- 17. 7~ 9 실시설계 사업자 선정 절차 진행

- 17. 7~11 공간간운영계획 수립

- 17.10~12 실시설계 진행

- 17.12. 시설공사사업자 선정 및 계약(전기공사, 소방공사, 철거공사, 폐기물처리용역사업 분야)

- 17.12. 구조안전진단 실시

- 18. 1. 시설공사사업자 선정 및 계약(소방기계, 기계, 건축, 정보통신, 감리용역 분야)

- 18. 9. 토목공사 설계 진행.

- 18.10. 토목공사사업자 선정

- 시설공사 진행 및 완료(18. 2.19. ~ 18.12.13.)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 기획관리실 양금식

- 최종 결재자 : 이사장 지선

○ 사업 관련자

구분	성명	직위	수행기간	담당업무
진행책임	양금식	담당	‘17.02~18.12.13.	시설공사 업무총괄
업무총괄	이영교	기획관리실장	‘18.02~18.12.13.	시설공사 책임
정보화담당	염동해	담당	‘18.02~18.06.30.	공사계획 및 진행
구매담당	박종수	담당	‘18.02~18.12.13.	구매
사료관담당	문성필	담당	‘17.01~18.12.13	사료보존실 공사

다른기관 또는

민간인 관련자

구분	성 명	소속 및 직책	분담업무
업무협의	정원용	에너지경제연구원 감사실장	실무협의 및 지원
	김 강	에너지경제연구원 사무국장
업무지원	박지웅	행자부 사회통합지원과 사무관	공사관련 행정지원
	임희성	행자부 사회통합지원과 주무관

추진실적

○ 사무실 이전 완료(18.5.2.)

○ 업무시설개선공사 완료(18.12.13.)

- 부동산 매매관련 부대비용 잔액을 활용하여 토목공사 및 보안등공사 진행(358백만원)