공고 제2021-030호

사  업  안  내  서

마석모란공원 민족민주열사묘역 정비사업

2021. 5.

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 마석모란공원 민족민주열사묘역 정비 시설공사

나. 공사현장 : 경기도 남양주시 경춘로 2110번길 8-102(화도읍 월산리 606-1)

다. 공사기간 : 착공일로부터 2개월 이내

라. 공사 개요

1) 공사 범위 : 철거 공사, 구조물공사, 계단 및 담장공사, 배수로인상, 기타공사 등

2) 공사 규모 : 조경석 철거 16.5㎡, 열사 안내판 제작 138개, 컨트리매너 쌓기 64㎡ 등

3) 공사 내용 : 계단 보강과 방부목 설치, 열사 안내판 제작, 이정표 제작 및 설치 등

마. 추정금액 : 금163,000,000원[148,181,812(추정가격) + 14,818,188(부가가치세)]

2. 공사기간 : 착공일부터 2개월 이내

3. 특기사항

1) 도급자는 설계단계에서의 인허가 내용, 유의사항 및 권장사항을 충분히 숙지하며 설계도서, 제반법규를 준수하여 공사에 반영하여야 한다.

2) 도급자는 본 공사 발주 당시의 현장 여건을 정밀하게 파악하여 본 공사로 인해 인근 시설물에 피해가 없도록 하여야 하며, 인근 시설물에 훼손이 있을 경우에는 도급자 부담으로 즉시 원상 복구하거나 변상 조치하여야 한다. 또한 이로 인한 공기 지연 등이 없도록 사전에 충분히 검토 후 시공하여야 한다.

3) 도급자는 주요 자재에 대한 시험 등 품질관리를 철저히 하여야 한다.

4) 도급자는 공사 착수 전에 가설시설물 설치계획서, 시공계획서 및 관련 법규에 따라 품질시험계획서, 안전관리계획서, 예정공정표 등이 포함된 착공계를 제출하여 감독자의 승인을 받아 시행하여야 한다.

5) 도급자는 공사 착수 전 주위 시설물의 위치를 확인하여 적정하고 안전한 시공이 이루어지도록 조치한다.

6) 도급자는 시공 시 공사 종사자에 대한 안전교육을 실시하고 공사전반에 대한 안전관리, 소방관리 및 방재관리를 철저히 하여야 하며, 민․형사상의 문제점 발생시 도급자가 책임진다.

7) 도급자는 공사 착수 전 공사에 지장을 초래할 수 있는 지중 매설물에 대한 조사를 실시하여야 하며 가스관로, 전기․통신관로, 상․하수도관로 등은 관할기관의 협조를 받아 공사에 장애가 되지 않도록 사전에 확인, 조치한다.

8) 도급자는 공사 시행중 품질관리를 위하여 필요시 도급자 부담으로 시공 등에 관하여 전문기관의 자문을 받을 수 있다.

9) 도급자는 공사 착수 전에 설계도서를 철저히 검토하여 시공에 불합리하거나, 사후 중대한 하자가 예상되거나, 현장상황과 상이한 부분이 있을 경우에는 즉시 감독자에게 서면으로 보고하여 도면이 보완될 수 있도록 조치하여야 하며, 물량의 과다산출 및 누락, 설계 서간 모순, 누락, 오류 등이 있을 시 감독자에게 보고하고 감독자의 지시에 따라 시공하여야 하며, 시공 및 구조상 필요한 부분은 시공 상세도면을 작성하여 감독자의 승인을 받아 시행한다.

10) 도급자는 공종별 시공계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아 시공하여야 하며, 본 공사에 투입되는 모든 자재는 견본품을 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 사용한다.

11) 도급자는 현장대리인 및 담당기술자를 배치함에 있어 기술과 경험이 풍부하고 본 공사와 유사한 건축물의 시공경험이 있는 기술자를 선정․배치하여야 하며, 사전에 감독자 승인을 받아야 한다. 또한 본 공사 진행 중에 역량이 부족하다고 판단되면 도급자는 감독자의 교체 지시에 응하여야 한다.

12) 도급자는 산업안전보건법 제30조에 따라 산업재해예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액에 계상하여야 한다. 또한 산업안전보건법시행령 제12조에 정한 바에 따라 산업안전보건법시행령 제14조에 의한 안전관리자를 선임하고 산업안전보건법시행령 제13조의 업무를 수행하도록 하여야 한다.

13) 도급자는 건설기술진흥법 제62조 동법시행령 제100조에 의거 안전관리계획서에서 정한 시기와 횟수에 따라 안전 점검을 실시하여야 하며, 정기 및 정밀안전점검 대상에 해당될 경우에는 건설안전 점검전문기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.

14) 발주자의 예산 등 사정에 의한 사업규모, 공기조정 및 공사의 일부분 제외 또는 변경 요구 시 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

15) 공사 중 건설관련법, 도로법, 건축법, 총포화약류단속법, 소방법, 공해방지법, 환경보전법 등에 저촉되지 않도록 해야 한다.

16) 본 공사 추진에 따른 모든 대관청 관련 업무 및 각종 인․허가 사항은 도급자가 발주자를 대행하여야 하며 이에 대한 허가수수료 등은 발주자 부담으로 한다.

17) 도급자는 모든 하도급공사에 대하여 하도급계약을 체결한 날로부터 10일 이내에 감독자에게 통보하여야 한다.

18) 시공자는 설계변경 및 지하매설물 등에 대한 공사내용을 정확히 기록, 유지하여 준공 시 준공설계도서에 명확히 표기하여 제출하여야 하며 기타 감독자가 요구하는 공사관련 서류를 명확히 작성하여 제출한다.

19) 공사범위의 구분은 공종별 도면 및 내역에 따르고 도면에 표기되지 않은 사항 및 현장 여건상 설계변경이 불가피한 부분은 감독자의 승인을 받아 변경할 수 있다.

20) 공사현장에서 발생되는 부산물 및 일체의 폐기물은 관계법을 준수하여 재활용이 가능한 품목은 재활용하고 재활용이 어려운 일반(건설)폐기물은 관계법에 따라 처리되도록 조치하여야 한다. 다만, 즉시 장외처리가 어려운 경우에는 공정진행에 방해되지 않는 장소에 모아서 보관하여야 하며 미관에 지장이 없도록 비닐 등으로 덮고 폐기물이 주위로 확산되지 않도록 조치하여야 한다. 아울러, 관련법에 따라 폐기물 성상별 분리배출을 철저히 하고 가수, 토사혼입 등으로 인한 폐기물 물량 오류(증가)를 방지하는 등 건축ㆍ전기ㆍ통신ㆍ소방공사 등의 도급자간 공동 관리를 철저히 하여야 한다.

21) 각종 장비 시운전은 1개월 이상 실시하여 반드시 사용검사를 받은 후 사용하는데 이상이 없을 시에 발주자에게 시설물을 인계한다.

22) 공사중 발생되는 폐자재의 정리, 청소, 자재관리, 공구관리는 도급자가 처리하여야 하며 사전에 공종별로 협의하여야하며 감독자의 지시에 따라 처리한다.

23) 도급자는 건축, 전기, 통신 등 타 공종과 긴밀하게 공정을 협의하여야 한다.

24) 도급자는 현장자재의 도난 및 파손방지, 우기시의 복구 등을 위한 경비인력이 필요한 경우, 각 공종별 계약금액 비율로 공통경비를 부담하여야 한다.

25) 도급자는 현장에서 시설물을 공동으로 사용함에 따라 발생하는 비용(정화조 수거료, 수도요금 등)에 대하여 공종별 도급자와 협의하여 분담하여 처리하여야 한다.

26) 도급자는 공사현황에 관련된 정보를 정확하고 신속하게 파악할 수 있도록 공정관리를 하여야 하며, 공사현장의 제반 사항을 기록 조치하여야 한다.

27) 도급자는 공정별 사업추진 실적, 우수사례, 공사관련 사진첩 등 을 정확히 기록, 작성, 유지하고, 제출 요청 시 감독자에게 제출하여야 한다.

28) 도급자는 설계변경 및 시공변경 등에 대한 공사내용을 정확히 기록, 유지하여 준공시 준공설계도서에 명확히 표기하여 제출하여야 하며, 준공사진첩 및 공사 종결보고서, 기타 공사관련 서류를 제출한다.

29) 신속한 공사 진행을 위해, 도급자는 공사진행시 시공상세도면 작성 및 현장의 변경사항에 대하여 원활한 도면 변경작업이 가능하도록, 캐드지원이 가능한 관련 전문인력을 배치, 운용하여야 한다.

30) 중소기업제품 공사용 자재 직접구매와 관련한 사항은 다음과 같다.

① 도급자는 공사 착공 후 10일 이내에 전체 공정표 내에 중소기업 공사용 직접 구매 자재(이하 “공급자재”라 한다)의 소요시기 및 수량을 반영하여 제출하며, 공급자재의 규격서 작성, 설계도면, 발주서류 등을 정밀 검토하여 발주처에 의견을 제출하여야 한다.

② 발주자가 도급자 설치 공급자재의 발주를 위해 관련 규격서, 수량 및 상세도를 도급자에게 검토요구 시 5일 이내에 검토의견 및 공급자재 청구서를 제출하여야 한다.

③ 도급자는 자재 계약 후 제조 또는 납품관련 공정회의에 참석하여야 한다.

④ 도급자가 도급자 설치 공급자재의 현장 입고 후부터는 도급자의 책임 하에 자재관리를 철저히 하여야 하며 도급자의 부담으로 현장 내 소운반을 하여 관련 시방에 적합토록 설치하여야 한다. 입고 시 발주처와 함께 검수 후 도급자가 자재를 인수하여야 하며 인수 후 자재 파손, 손실 등의 발생 시 도급자는 일체의 책임을 지며 제조업체와 협의하여 공사 일정에 차질이 없도록 도급자의 비용으로 재구매하여 설치하여야 한다.

⑤ 발주처의 공급자 설치 공급자재 설치 시 도급자는 적극 협조하여야 한다. 또한 공급자재 설치 시 마감방법 및 설치시기는 관련업체와 협의하여 결정하며 도급자는 관련 부대공사를 우선하여 시행하여야 한다.

⑥ 도급자 설치 공급자재의 물량은 설계서에 명시된 수량 내에서 계약상대자의 공정 단계별 청구수량을 기준으로 하며, 계약상대자의 멸실, 사고 등의 사유로 증가된 물량 및 과잉청구로 인한 잉여물량은 동 공급자재 계약금액에 상당하는 금액을 계약금액에서 감액 처리 한다. 또한 각 공급자재별 할증물량내의 잉여자재는 발주처에게 반납하여야 한다.

31) 도급자는 본 공사 시행과 관련하여 민원이 야기되지 않도록 지역주민과 긴밀히 협조하는 등 최대한 예방조치를 취하여야 하며, 민원 발생 시에는 이를 신속히 처리하고 이와 관련된 비용은 도급자 부담으로 한다.

32) 도급자는 공사 준공 시 다음과 같은 성과품을 제출하여야 하며, 이에 소요되는 제반 비용은 도급자가 부담하여야 한다.

구 분	성과품	비 고
ㅇ 준공설계도서	5부	현장대리인 날인
ㅇ 현장시공, 매몰부위, 각종시험 사진 및 동영상(필요시)	각 1세트	기존시설물 전경 포함
ㅇ 각종 인, 허가필증 (사용전 검사필증 포함)-필요시	1부
ㅇ USB * 준공설계도서 및 관련 인허가필증 등 일체의 준공관련 자료를 저장	각 3세트
ㅇ 기타 감독자가 요구하는 사항	1부

***