<별지 서식>

사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2018-14

담당부서

작성자

기획관리실

(양금식/031-961-9532

/yangks1@kdemo.or.kr)

사 업 명

사업회 업무시설 개선공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경: 사업회의 안정적인 운영과 방문 프로그램 진행의 효율화를 위한 업무시설 필요성 증대에 따라 지방 이전이 완료된 공공기관(에너지경제연구원)의 종전부동산을 관계기관 협의에 의해 확보하고, 관련분야 전문가가 참여하여 수립한 공사기본계획에 의거하여 시설개선공사 진행중

○ 추진기간: ’17년 3월 ~ ’18년 11월

○ 총사업비: 4,500백만원(2차년도)

○ 주요내용 : 사무공간, 건물 외관 개선, 사료보존실 및 사료관련 시설 공사, 전시홍보실과 교육연수시설 구축

○ 추진경과

- 17. 3~ 6 공사기본계획 수립((주)이유건축사사무소)

- 17.10~12 실시설계 진행((주)시명종합건축사사무소)

- 17.12. 구조안전진단 실시((주)사림엔지니어링)

- 17.12~18.2. 시설공사사업자 선정(전기공사, 소방공사, 철거공사, 폐기물처리용역, 정보통신, 기계, 건축, 감리용역)

연번	분야	계약업체	계약기간	공사비(천원)
1	설계용역	㈜시명종합건축사사무소	17.10.19~17.12.20	147,662
2	철거공사	수경건설㈜	17.12.28~18.04.10	355,090
3	폐기물처리용역	강북공영㈜	17.12.28~18.06.30	74,543
4	전기공사	(유)대진	17.12.28~18.07.16	444,789
5	소방(전기)공사	㈜성민이엔지	17.12.28~18.06.30	135,635
6	소방(기계)공사	지음이엔아이주식회사	18.02.01~18.08.03	128,788
7	정보통신공사	시너지네트워크	18.02.01~18.07.31	179,047
8	기계공사	주식회사 삼보엔지니어링	18.02.01~18.08.03	772,397
9	건축공사	서강종합건설주식회사	18.02.05~18.10.05	1,700,589
10	감리용역	이수종합건축사사무소	18.02.05~18.10.02	38,673
		㈜정연엔지니어링
합계				3,977,213

- 18.2.~  시설공사 진행중

- ~18.9   시설공사 완료

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 기념관추진단 이난현 / 기획관리실 양금식

- 최종 결재자 : 이사장 지선

○ 사업 관련자

구분	성명	직위	수행기간	담당업무
책임총괄	이영교	기획관리실장	‘18.02월~현재	시설공사 책임
공사진행	양금식	담당	‘17.02월~현재	시설공사 진행
담당	염동해	담당	‘17.01월~현재	공사계획 및 진행
담당	이정환	담당	‘18.05월~현재	시설운영 및 관리
담당	정문모	담당	‘18.05월~현재	시설관리
담당	박종수	담당	‘18.02월~현재	구매 및 자산관리
담당	조병근	담당	‘18.05월~현재	사료보존실 관리

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 관련기관 관련자

구분	성 명	소속 및 직책	분담업무
업무협의	정원용	에너지경제연구원 감사실장	실무협의 및 지원
	김 강	에너지경제연구원 사무국장
업무지원	박지웅	행자부 사회통합지원과 사무관	공사관련 행정지원
	임희성	행자부 사회통합지원과 주무관

○ 시설공사 관련자

연번	분야	협력업체	담당자
1	건축공사	서강종합건설(주)	강주환 부 장
2	감리용역	이수종합건축사사무소	송경수 건축사
		㈜정연엔지니어링	유경주 이 사
3	전기공사	(유)대진	송영준 이 사
4	철거공사	수경건설(주)	전석환 차 장
5	폐기물처리용역	(주)강북공영	윤상일 대 리
6	소방(전기)공사	(주)성민이엔지	정광준 소 장
7	소방(기계)공사	지음이엔아이(주)	조경춘 이 사
8	기계공사	(주)삼보엔지니어링	정호영 차 장
9	정보통신공사	시너지네트워크	정돈섭 이 사
10	합성수지창호 구매 설치	㈜중일	전현석 지사장
2	금속커튼월 구매 설치	㈜신창	양성현 과 장
3	LED 전등 구매	㈜선일일렉콤	나성민 이 사
4	이동식서가(모빌랙) 구매	㈜피아산업	윤한주 부 장
5	AL복합패널 구매 설치	중재기업주식회사	임진석 부 장

추진실적

○ 공사현황 : 전기, 소방, 정보통신, 기계공사 완료

- 전기 : 승강기 완공검사 완료(18.7.13 승강기안전공단)

- 소방 : 소방시설 완공검사 완료(18.8.10. 의왕소방서)

- 8월 말 현재 업무시설 개선공사 마무리 진행중(건축)

○ 건물외부 개선과 대지포장을 위한 설계 진행중(건축․토목)